정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	설악동 재건사업
② 추진배경	설악동의 글로벌 관광거점도시 조성을 위한 중추사업 추진으로 동북아 대한민국 대표 관광지 기반 마련
③ 사업개요	○ 총사업비 : 264억원 ○ 위 치 : 설악동 3-2번지 일원 ○ 사업내용 - 기본 및 실시설계 1식 - 관광 기반시설(족욕공원 및 쌍천 산책로 등) 조성
④ 사업부서	행정국 관광과		⑤ 담당자	시설7급 엄태현 행정5급 민현정
⑥ 선정기준	시가 발주하는 총사업비 30억원 이상의 공사		⑦ 사업기간	2020년 ~ 2025년
<그간 주요 추진내용>
○ 일상감사 및 계약심사 의뢰[설악동 재건사업(설악온천마을 관광거점 조성) 화장실 신축공사]		‘22.11.22	고재홍 과장 정태균 팀장 엄태현 주무관
○ 설악동 재건사업(설악온천마을 관광거점 조성) 화장실 신축공사 착공		‘22.12.22	고재홍 과장 정태균 팀장 엄태현 주무관
○ 설악동 재건사업(설악온천마을 관광거점 조성) 화장실 신축공사(전기/기계) 착공		‘23.03.02	권금선 과장 김호정 팀장 엄태현 주무관
○ 설악동 재건사업(설악온천마을 관광거점 조성) 설악산문화시설 리모델링 실시설계용역 착수		‘23.04.03	권금선 과장 김호정 팀장
○ 속초 설악동 재건사업 개발구역지정 및 실시설계용역 준공		‘23.04.05	권금선 과장 김호정 팀장
○ 도시계획시설(공원13: 문화공원) 실시계획인가 신청		‘23.07.03	민현정 과장 김호정 팀장
○ 쌍천산책로 경관조명 설치공사 및 청봉로 일원 쌍천산책로 정비공사 계약심사(道) 완료		‘23.08.29	민현정 과장 김호정 팀장

○ 설악동 재건사업(설악온천마을 관광거점 조성) 화장실 신축공사 준공	‘23.09.20	민현정 과장 김호정 팀장 엄태현 주무관
○ 도시계획시설(공원13: 문화공원) 실시계획인가	‘23.09.26	민현정 과장 김호정 팀장 엄태현 주무관
○ 쌍천산책로 경관조명 설치공사 착공	‘23.11.03	민현정 과장 김호정 팀장 엄태현 주무관
○ 소공원(문화공원 13) 조성공사 착공	‘23.11.07	민현정 과장 김호정 팀장 엄태현 주무관
○ 청봉로 일원 쌍천산책로 정비공사 착공	‘23.11.08	민현정 과장 김호정 팀장 엄태현 주무관