정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	속초 중도문 공공체육시설 조성사업
② 추진배경	❍ 타 지역에 비해 절대적으로 부족한 축구장 및 야구장 시설 확충 ❍ 도시 외곽지역 균형발전 및 전지훈련선수단 유치하여 지역경제 활성화
③ 사업개요	❍ 위 치 : 도문동 1400-2번지 일원(중도문운동장, A=40,096㎡) ❍ 기 간 : 2020년 ~ 2024년 ❍ 내 용 : 야구장 1면, 축구장 1면, 진입도로, 각종 부대시설 등 ❍ 사업비 : 12,524백만원 (국비 2,400, 도비 1,680, 시비 8,444)
④ 사업부서	행정국 문화체육과		⑤ 담당자	시설6급 황병록 행정5급 최상구
⑥ 선정기준	시가 발주하는 총사업비 30억원 이상의 공사		⑦ 사업기간	2020년 ~ 2024년
<그간 주요 추진내용>
○ 속초 중도문 공공체육시설 조성공사(기계) 착공		‘22.11.23.	김수근 문화체육과장 박용문 체육시설팀장 전철희 주무관
○ 속초 중도문 공공체육시설 조성공사 동절기 공사중지 알림 (건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 재해예방기술지도)		‘22.12.19.	김수근 문화체육과장 박용문 체육시설팀장 전철희 주무관
○ 속초 중도문 공공체육시설 조성공사(건축) 공사 재개 결의		‘23.03.06.	최상구 문화체육과장 협조자 이복옥 회계과장 협조자 이경선 계약관리팀장 유돈주 체육시설팀장 황병록 주무관
○ 속초 중도문 공공체육시설 조성공사 공사 재개 결의 (기계, 전기, 통신, 소방, 재해예방기술지도)		‘23.04.06.	최상구 문화체육과장 협조자 이복옥 회계과장 협조자 이경선 계약관리팀장 유돈주 체육시설팀장 황병록 주무관
○ 소로1-12호선 도시계획도로 개설공사 시행 결의		‘23.04.25.	이병선 시장 김성림 부시장 김용구 행정국장 협조자 이복옥 회계과장 협조자 이경선 계약관리팀장 최상구 문화체육과장 유돈주 체육시설팀장
○ 속초 중도문 공공체육시설 조성공사(건축) 공사기간 연장 결의		‘23.05.08.	최상구 문화체육과장 협조자 이복옥 회계과장 협조자 이경선 계약관리팀장 유돈주 체육시설팀장 황병록 주무관
○ 속초 중도문 공공체육시설 조성공사(토목) 공사기간 연장 결의		‘23.05.10.	최상구 문화체육과장 협조자 이복옥 회계과장 협조자 이경선 계약관리팀장 유돈주 체육시설팀장 황병록 주무관
○ 소로1-12호선 도시계획도로 개설공사 착공계 제출		‘23.06.05.	최상구 문화체육과장 유돈주 체육시설팀장
○ 속초 중도문 공공체육시설 조성공사(토목) 공사 재개 결의		‘23.06.08.	최상구 문화체육과장 협조자 이복옥 회계과장 협조자 이경선 계약관리팀장 유돈주 체육시설팀장 황병록 주무관
○ 속초 중도문 공공체육시설 조성공사(토목) 공사 재착수		‘23.06.12.	최상구 문화체육과장 유돈주 체육시설팀장
○ 도시계획시설(도로:소로1-12호선) 실시계획 인가(변경)신청		‘23.6.29.	최상구 문화체육과장 유돈주 체육시설팀장
○ 속초 중도문 공공체육시설 조성공사(토목) 공사 설계변경추진계획 보고		‘23.8.11	이병선 시장 김성림 부시장 이승우 행정국장 협조자 이복옥 회계과장 협조자 이경선 계약관리팀장 최상구 문화체육과장 유돈주 체육시설팀장
○ 속초 중도문 공공체육시설 조성공사(토목) 공사 변경(전체분 1회, 1차분 1회) 시행결의		‘23.8.18	이병선 시장 김성림 부시장 이승우 행정국장 협조자 이복옥 회계과장 협조자 이경선 계약관리팀장 최상구 문화체육과장 유돈주 체육시설팀장
○ 속초 중도문 공공체육시설 조성 공사 추진, 공정률 81%		‘23.11.18	이병선 시장 김성림 부시장 이승우 행정국장 협조자 이복옥 회계과장 협조자 이경선 계약관리팀장 최상구 문화체육과장 유돈주 체육시설팀장