정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	속초 중도문 공공체육시설 조성사업
② 추진배경	❍ 타 지역에 비해 절대적으로 부족한 축구장 및 야구장 시설 확충 ❍ 도시 외곽지역 균형발전 및 전지훈련선수단 유치하여 지역경제 활성화
③ 사업개요	❍ 위 치 : 도문동 1400-2번지 일원(중도문운동장, A=40,096㎡) ❍ 기 간 : 2020년 ~ 2022년 ❍ 내 용 : 야구장 1면, 축구장 1면, 진입도로, 각종 부대시설 등 ❍ 사업비 : 11,024백만원 (국비 2,400, 도비 1,680, 시비 6,944)
④ 사업부서	행정국 문화체육과		⑤ 담당자	시설7급 전철희 행정5급 김수근
⑥ 선정기준	시가 발주하는 총사업비 30억원 이상의 공사		⑦ 사업기간	2020년 ~ 2023년
<그간 주요 추진내용>
○ 중도문 공공체육시설 도시관리 계획(도로) 결정용역 재개결의		‘21.11.25	장봉주 문화체육과장 협조자 노화숙 회계과장 협조자 민현정 계약관리담당 김희 체육시설담당 박용문 주무관
○ 중도문 공공체육시설 도시관리 계획(도로) 결정용역 재착수		‘21.11.26	장봉주 문화체육과장 김희 체육시설담당 박용문 주무관
○ 중도문 공공체육시설 도시관리 계획(도로) 결정용역 준공		‘21.11.30	장봉주 문화체육과장 김희 체육시설담당 박용문 주무관
○ 속초 중도문 공공체육시설 조성공사(폐기물처리용역) 착수		‘21.12.03	장봉주 문화체육과장 김희 체육시설담당 박용문 주무관
○ 속초 중도문 공공체육시설 조성공사(임목폐기물처리용역) 착수		‘21.12.07	장봉주 문화체육과장 김희 체육시설담당 박용문 주무관
○ 소로1-12호선 도시계획도로 개설공사 실시설계용역 시행 결의		‘22.01.25	박재일 행정국장 협조자 현태복 회계과장 협조자 김연설 계약관리담당 장봉주 문화체육과장 김희 체육시설담당
○ 속초 중도문 공공체육시설 조성공사(건축) 시행 결의		‘22.04.11	김철수 시장 정성훈 부시장 박재일 행정국장 협조자 현태복 회계과장 협조자 김연설 계약관리팀장 장봉주 문화체육과장 김희 체육시설팀장
○ 속초 중도문 공공체육시설 조성공사(폐기물처리용역) 준공		‘22.04.20	장봉주 문화체육과장 김희 체육시설팀장 전철희 주무관
○ 속초 중도문 공공체육시설 조성공사(임목폐기물처리용역) 준공		‘22.05.02	장봉주 문화체육과장 김희 체육시설팀장 전철희 주무관
○ 속초 중도문 공공체육시설 조성 건축공사		‘22.05.31	장봉주 문화체육과장 김희 체육시설팀장
○ 속초 중도문 공공체육시설 조성(건축) 현장여건 보고 및 공사중지 요청		‘22.05.31	장봉주 문화체육과장 김희 체육시설팀장
○ 속초 중도문 공공체육시설 조성공사(건축) 일시중지 결의		‘22.07.26	김수근 문화체육과장 협조자 이복옥 회계과장 협조자 김연설 계약관리팀장 박용문 체육시설팀장 전철희 주무관
○ 속초 중도문 공공체육시설 조성공사(건축) 공사 재개		‘22.10.18	김수근 문화체육과장 협조자 이복옥 회계과장 협조자 김연설 계약관리팀장 박용문 체육시설팀장 전철희 주무관
○ 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증서 교부(중도문 공공체육시설)		‘22.10.26	김수근 문화체육과장 박용문 체육시설팀장 전철희 주무관
○ 속초 중도문 공공체육시설 조성공사(전기) 착공		‘22.11.21	김수근 문화체육과장 박용문 체육시설팀장 전철희 주무관
○ 속초 중도문 공공체육시설 조성공사(기계) 착공		‘22.11.23	김수근 문화체육과장 박용문 체육시설팀장 전철희 주무관