정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	식수(상수원)확보문제 근본적 해결방안 마련
② 추진배경	속초시는 상습가뭄으로 대규모 제한급수가 반복적 시행됨에 따라 갈수기 취수원 안정화 대책과 항구적 물부족 문제 해소 절실
③ 사업개요	○ 지방상수도 현대화사업 : 유수율 향상으로 누수(5,000㎥/일)절감 - 282억원(국비 50%, 도비 5%, 시비 45%) - 2019년~2023년 ○ 재해위험지역(쌍천 상습가뭄지구) 정비사업 : 수원(9,000㎥/일)확보 - 280억원(국비 50%, 도비 10%, 시비 40%) - 2019년~2021년
④ 사업부서	상수도사업소		⑤ 담당자	시설6급 김규완 행정5급 이경철
⑥ 선정기준	주요 시정 현안에 관한 사항		⑦ 사업기간	2019년 ~ 2023년
<그간 주요 추진내용>
○ 지방상수도 현대화사업 2차년도 사업비 지출		‘20.03.06	김철수 시장 이창우 부시장 강전업 소장 장사식 담당
○ 재해위험지역 정비사업 2차년도 사업비 지출		‘20.03.11	김철수 시장 이창우 부시장 강전업 소장 김규완 담당
○ 지방상수도 현대화사업 중블록 고립완료 및 유수율 측정 개시		‘20.03.31	강전업 소장 장사식 담당 최일권 주무관
○ 재해위험지역 정비사업 사전설계 검토 요청		‘20.04.10	강전업 소장 김규완 담당
○ 재해위험지역 정비사업 기술심의 (자문)위원회 개최		‘20.05.11	강전업 소장 김규완 담당 남기훈 주무관
○ 지방상수도 현대화사업 2차년도 사업비 지출(2차분)		‘20.05.11	김철수 시장 이창우 부시장 강전업 소장 장사식 담당 최일권 주무관
○ 재해위험지역 정비사업 사전설계 검토 조치계획서 제출		‘20.06.02	강전업 소장 김규완 담당
○ 지방상수도 현대화사업 우선사업 대상지(중앙 1블록) 선정		‘20.06.04	강전업 소장 장사식 담당 최일권 주무관
○ 재해위험지역 정비사업 실시계획 공고		‘20.06.18	강전업 소장 김규완 담당
○ 설악동일원 대체수원 개발사업 관정개발 1공 완료		‘20.06.30	강전업 소장 김규완 담당 남기훈 주무관
○ 지방상수도 현대화사업 우선사업 대상지 소블록 구축 및 누수탐사 착수		‘20.07.20	강전업 소장 장사식 담당 최일권 주무관
○ 재해위험지역 정비사업 하천점용 허가 완료		‘20.07.20	강전업 소장 김규완 담당 남기훈 주무관
○ 학사평일원 대체수원 개발사업 도로점용허가 승인		‘20.08.07	강전업 소장 김규완 담당 남기훈 주무관
○ 학사평일원 대체수원 개발사업 시공사 선정 및 공사착공		‘20.08.28	강전업 소장 김규완 담당 남기훈 주무관
○ 재해위험지역 정비사업 산지전용 허가 신청		‘20.09.14	강전업 소장 김규완 담당 남기훈 주무관
○ 재해위험지역 정비사업 산지점용 허가 완료		‘20.09.21	강전업 소장 김규완 담당 남기훈 주무관
○ 재해위험지역 정비사업 피골지역 관정 3개공 개발 완료		‘20.09.21	강전업 소장 김규완 담당 남기훈 주무관
○ 설악동일원 대체수원 개발사업 취수관로 매설 완료		‘20.09.23	강전업 소장 김규완 담당 남기훈 주무관
○ 재해위험지역 정비사업 가마소지역 관정 2개공 개발 완료		‘20.09.25	강전업 소장 김규완 담당 남기훈 주무관
○ 지방상수도 현대화사업 원격누수감시시스템 누수감지센서 설치완료		‘20.10.27	강전업 소장 장사식 담당 최일권 주무관
○ 재해위험지역 정비사업 현장점검		‘20.11.18	김철수 시장 강전업 소장 김규완 담당
○ 지방상수도 현대화사업 감압밸브 설치를 위한 도로점용허가 완료		‘20.11.30	강전업 소장 장사식 담당 최일권 주무관
○ 지방상수도 현대화사업 중간 추진사항 보고		‘20.12.03	김철수 시장 강전업 소장 장사식 담당 최일권 주무관
○ 지방상수도 현대화사업 사전 기술검토(안) 제출		‘20.12.07	강전업 소장 장사식 담당 최일권 주무관
○ 지방상수도 현대화사업 고수압 지역 감압밸브 2개소 설치 완료		‘20.12.11	강전업 소장 장사식 담당 최일권 주무관
○ 지방상수도 현대화사업 학사평 수계 감암밸브 설치		‘20.12.30	강전업 소장 장사식 담당 최일권 주무관
○ 재해위험지역 정비사업 2차년도 사업비 집행내역 및 3차년도 사업비 집행계획 보고		‘21.01.29	이대수 소장 김규완 담당 남기훈 주무관
○ 지방상수도 현대화사업 2020년도 집행내역 보고		‘21.02.04	이대수 소장 장사식 담당 최일권 주무관
○ 2022년 지방상수도 현대화사업 예산신청 및 수도사업 경영개선 평가자료 제출		‘21.02.24	이대수 소장 장사식 담당 최일권 주무관
○ 재해위험지역 정비사업 3차년도 사업비 1차분 지출		‘21.03.04	김철수 시장 정성훈 부시장 이대수 소장 김규완 담당
○ 재해위험지역 정비사업 추진 상황보고		‘21.04.12	김철수 시장 정성훈 부시장 이대수 소장 김규완 담당
○ 지방상수도 현대화사업 3차년도 사업비 1차분 지출		‘21.04.21	김철수 시장 정성훈 부시장 이대수 소장 장사식 담당
○ 재해위험지역 정비사업 추가수원 개발 요청		‘21.04.28	이대수 소장 김규완 담당
○ 재해위험지역 정비사업 신속집행 및 현장관리실태 점검		‘21.05.26	이대수 소장 김규완 담당
○ 지방상수도 현대화사업 3차년도 사업비 2차분 지출		‘21.05.31	김철수 시장 정성훈 부시장 이대수 소장 장사식 담당 최일권 주무관
○ 속초시 물(수원) 확보대책		‘21.06.21	김철수 시장 이대수 소장 김규완 담당
○ 지방상수도 현대화사업 보안점검		‘21.08.11	이경철 소장 장사식 담당 최일권 주무관
○ 재해위험지역 정비사업 3차년도 사업비 2차분 지출		‘21.08.17	김철수 시장 정성훈 부시장 이경철 소장 김규완 담당 남기훈 주무관
○ 재해위험지역(쌍천 상습가뭄지구) 정비사업 설악교사용 협조		‘21.08.03	이경철 소장 김규완 담당
○ 재해위험지역(쌍천 상습가뭄지구) 정비사업 하천점용허가(변경) 신청		‘21.08.26	이경철 소장 김규완 담당
○ 재해위험지역(쌍천 상습가뭄지구) 정비사업 세부추진계획 보고		‘21.08.31	김철수 시장 정성훈 부시장 이경철 소장 김규완 담당
○ 재해위험지역(쌍천 상습가뭄지구) 정비사업 양수시험 결과 보고		‘21.09.06	김철수 시장 정성훈 부시장 이경철 소장 김규완 담당
○ 지방상수도 현대화사업 사업대상지 외 블록구축공사 착공		‘21.09.27	이경철 소장 장사식 담당 최일권 주무관
○ 지방상수도 현대화사업 추진현황 보고		‘21.10.20	이경철 소장 장사식 담당 최일권 주무관
○ 지방상수도 현대화사업 문제점 및 대책보고		‘21.10.28	이경철 소장 장사식 담당 최일권 주무관
○ 지방상수도 현대화사업 단계시험(야간단수) 추진보고		‘21.10.29	이경철 소장 장사식 담당 최일권 주무관
○ 재해위험지역(쌍천 상습가뭄지구) 정비사업 속초 물 자립도시 완성 선포식 개최 계획 → 실시 : ‘21. 11. 15.		‘21.11.09	김철수 시장 정성훈 부시장 이경철 소장 김규완 담당
○ 재해위험지역(쌍천 상습가뭄지구) 정비사업 통수시험 및 시설물 점검계획 → 실시 : ‘21. 12. 8. ~ 12. 9.		‘21.11.22	이경철 소장 김규완 담당
○ 지방상수도 현대화사업 우선사업대상지 블록구축공사 준공		‘21.12.08	이경철 소장 장사식 담당 최일권 주무관