		2016년 속초시 하반기 재정공시(결산)

2016년 속초시 하반기 재정공시(결산)

9

주요 투자사업 추진현황

9-1. 투자심사 대상사업

우리 속초시에서 ‘15년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
생활체육공원조성사업	4,590	4,000	590	-	2016년	2011년	100%
쌍천배수구역외 2개소 하수관거 정비	21,611	7,414	7,381	6,816	2016년	2011년	80%
속초하수처리장 고도처리 시설 개량	5,272	3,742	1180	350	2016년	2011년	100%
동명항 주변 대형주차장 조성	1,734	1,345	389	-	2015년	2012년	100%
설악문화제	1,985	-	625	1,360	지속	2013년	100%
수산물공동가공시설 현대화 사업	3,000	-	3,000	-	2017년	2013년	20%
대포수협 수산물 물류유통센터	4,496	3,900	596	-	2015년	2013년	100%
대한민국음악대향연	1,460	710	750	-	지속	2014년	100%
신흥사유물전시관 건립	3,860	290	1,600	1,970	2016년	2013년	48%
속초시수협 수산물산지거점유통센터(FPC)	11,200	9,280	1,920	-	2015년	2014년	100%
제3단계주거환경 개선사업(금호3지구)	4,396	-	200	4,196	2018년	2014년	15%
신흥사 템플스테이 선체험관 건립	3,000	900	2,100	-	2016년	2014년	49%

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2015년에 추진한 사업

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

생활체육공원 조성사업

담당자

교육문화체육과 유돈주(☎639-2474)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도심지내 체육공원 조성으로 접근성 향상 및 시민 건강 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 2. ~ 2016. 2.

○ 위 치 : 속초시 교동 산231-1번지(만리공원 내)

○ 규 모 : 체육공원 25,400㎡ 조성

- 경기시설 : 테니스장 2면, 농구장 1면, 족구장 1면, 풋살장 1면

- 조경시설 : 관목 28,650주, 교목 640주, 초화류 30,450주, 자연학습장

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,590백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	4,590	4,000	590	-	-
국 비	1,350	1,350	-	-	-
시 도 비	630	630	-	-	-
시군구비	2,610	2,020	590	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 도시관리계획 변경결정 및 지형도면 고시 : ‘12. 11.

○ 실시설계용역 준공 : ‘13. 12.

○ 생활체육공원 조성사업 준공 : ‘16. 12.

○ 생활체육공원 대행사업 위탁관리(속초시설관리공단) : ‘16. 4.

□ 향후계획

○ 생활체육공원의 내실화 및 원활한 운영을 위한 이용안내 및 홍보강화

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

쌍천배수구역외 2개소 하수관거정비공사

담당자

수질환경사업소

전재순(☎639-2940)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 합류식 하수관거의 우·오수 분리시공을 통해 하수차집율 향상 및

하수처리장 운영효율 극대화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 3 ~ 2016. 12.

○ 위 치 : 속초시 관내일원(교동, 노학동, 조양동, 장사동 일부)

○ 규 모 : 하수관거 정비 L=29.80㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :        백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	21,611	3,428	3,986	7,381	6,816
국 비	14,747	2,200	2,859	5,037	4,651
시 도 비
시군구비	6,864	1,228	1,127	2,344	2,165
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 하수관거 정비 L=23㎞ 완료

□ 향후계획

○ ‘16. 12월 공사준공 및 정산

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

속초하수처리장

고도처리시설개량사업

담당자

수질환경사업소

이승용(☎639-2945)

□ 사업목적 및 필요성

○ 방류수 수질기준 강화(하수도법 시행규칙 제3조)에 따른 수질기준 준       수를 위한 고도처리시설 개량사업

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 7월 ~ 2016. 4. 30.

○ 위 치 : 속초시 대포동 해오름로 99

○ 규 모 : 생물반응조 2지 증설(2,999㎥) 및 2차침전지 2지 증설(1,666㎥)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,272백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	5,272	3,742		1,180	350
국 비	2,636	2,636
시 도 비	791	791
시군구비	1,845	315		1,180	350
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업 위·수탁 협약 체결(속초시↔한국환경공단) : 2012. 7월

○ 개량사업 실시설계보고서 준공 : 2014. 6월

○ 개량사업 설치(변경)인가 : 2014. 7월

○ 개량사업 계약 체결 및 착공 : 2014. 9월

○ 콘크리트 구조물, 전기 및 기계시설 설치 : 2015. 3월 ~ 12월

○ 속초하수처리장 고도처리시설개량 시설 준공 : 2016. 4. 30

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

동명항 주변 주차장 조성사업

담당자

교통행정과 임진우(☎639-2188)

□ 사업목적 및 필요성

○ 늘어나는 교통수요에 대비한 접근성 향상 등 교통인프라 확충

○ 교통기반시설 확충으로 도심권 주차난 해소와 지역경제 활성화 기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2014(3년)

○ 위 치 : 속초등대밑 : 영랑동 1-4번지 외 2필지

등대모텔앞 : 동명동 1-115번지 외 12필지

국유지활용 : 동명동1-241번지외 1필지(대한통운 및 일신공업사 부지)

○ 규 모 : 5,186㎡,  221대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,734백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	1,734	918	427	389	-
국 비
시 도 비
시군구비	1,734	918	427	389	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 도시계획시설(주차장) 실시계획 인가 : 2012. 5. 29

⇒ 동명동 노외주차장(21, 22) 조성사업

○ 동명항길(구. 대한통운) 주차장 조성 완료 : 953㎡, 32면, 842백만원

○ 영금정길(등대모텔 앞) 주차장 조성 완료 : 813㎡, 32면, 844백만원

□ 향후계획

○ 영금정길(등대모텔 앞) 주차장 확충 사업 : 1,637㎡, 63대(총95대)

※ 동명4 자연재해위험지구 정비사업에 포함 : 안전방재과 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

설악문화제 행사지원

담당자

교육문화체육과 이경임(☎639-2221)

□ 사업목적 및 필요성

○ 속초시의 대표 전통문화축제인 ‘설악문화제’의 전통성 유지

○ 미래 전통이 될 지역문화를 발굴 및 시민단합과 축제의 장 마련

○ 관광객의 참여를 유도할 수 있는 문화관광 상품으로 개발

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 10월중

○ 위 치 : 속초시 일대(로데오거리, 설악산)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 625백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	1,985	－	625	680	680
국 비	－	－	－	－	－
시 도 비	60	－	20	20	20
시군구비	1,803	－	583	610	610
지 방 채	－	－	－	－	－
민간자본	122	－	22	50	50
기 타	－	－	－	－	－

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 투융자심사 완료일 : 2013. 7. 23.

○ 개막식 및 축하공연 : 2015.10. 9.(금)

○ 산악페스티벌 진행 : 2015.10. 3.(토) ~ 10. 4.(일) /설악산 일원

○ 거리페스티벌 진행 : 2015.10. 8.(금) ~ 10.10.(일) / 설악로데오거리

□ 향후계획

○ 속초축제위원회와 예술단체와의 간담회를 통한 차별화된 프로그램 모색

○ 지역상인단체와 협력을 통한 지역 경기 활성화

○ 문화자원 개발 및 콘텐츠 개발을 통한 관광객 유입 유도

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

수산물 공동가공시설 현대화

담당자

해양수산과 김현주(☎639-2469)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한ㆍ페 FTA 관련 국내 오징어 가공산업 육성을 위한 공동가공 시설          현대화로 경쟁력 있는 수산산업기반 구축 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : ‘15 ~ ‘17년

○ 위    치 : 속초시 청호동 1341-1번지 외 1필지(항만부지)

○ 사업규모 : 1동(지상2층, 지하1층/건축면적 1,727.72㎡/철근콘크리트조)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,000			3,000
국 비	1,500			1,500
시 도 비
시군구비	1,500			1,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 기본 및 실시설계용역 완료 : ‘15. 3. 18 ~ 10. 30 / 97백만원

○ 사업부지 이전 청호동 주민설명회 개최 : ‘15. 11. 17 /청호동주민센터

○ 비관리청 항만공사 시행허가(강원도) : ‘15. 12. 15

○ 공사 착공 : ‘15. 12월

□ 향후계획

○ 공사 조기 준공 : ‘17. 3월

사업명

대포수협 수산물유통물류센터 신축

담당자

해양수산과 박기호(☎639-2416)

□ 사업목적 및 필요성

○「다기능 종합관광어항」으로 조성된 대포항이 준공단계에 있으나, 어항

기능을 수행할 어항기반시설 미흡

○ 수산물 유통시설 확충으로 수산물 공급기능 강화를 통한 안정적 판로기반

확보로 어업인 소득증대 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘14. 7. 24 ~ ‘15. 5. 19

○ 위 치 : 속초시 대포동 968번지(대포수협)

○ 규 모 : 지상2층 철근콘크리트구조(연면적 : 2,318.55㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,496백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	4,496	3,900	596	-	-
국 비	2,350	2,350	-	-	-
시 도 비	705	705	-	-	-
시군구비	1,441	845	596	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업완료 : ‘15. 5. 19

□ 향후계획

○ 없음

□ 사업변경 내역

○ 없음

사업명

대한민국음악대향연

담당자

관광과 이상훈(☎639-2545)

□ 사업목적 및 필요성

○ 속초시민은 물론 국내 및 해외관광객 누구나 즐길 수 있는 다양하고 대중성        높은 장르의 구성과 특색있는 행사로 관광‧음악도시로써 정체성을 확고히 정립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2015

○ 위 치 : 청초호유원지 특설무대 (조양동 1546-6)

○ 규 모

- 행사규모 : 일정별 차별화된 장르의 음악공연 및 부대행사 (음악공연 4일)

- 시스템규모 : 대형무대 1식, 좌석 8,000석, 체험부스 20동, 관람대기석 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,460백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비			710	750	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

◦ 기본계획 수립           : 2014년 1월

◦ 행사대행사 선정 및 계약 : 2014년 4월

◦ 행사홍보, 기반시설 조성 : 2014년 6월~7월

◦ 음악대향연 개최         : 2014년 8월

□ 향후계획

○ 2017년도 음악대향연 개최예정

※(2018 동계올림픽 붐 조성, 동서관통도로개통, 동서고속철도확정 등)

사업명

신흥사 유물전시관 건립사업

담당자

교육문화체육과 김만중(☎639-2958)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전시관 건립을 통한 유물의 과학적 보존 및 국민의 문화향유권 확대와 더불어 2018년 평창동계올림픽 개최에 따른 강원도 영동권 지역의 문화관광 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2016(3년간)

○ 위 치 : 강원도 속초시 설악산로 1042(설악동 151번지)

○ 규 모 : 지하1층, 지상2층 철근콘크리트구조(연면적 : 1,054㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,860백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,860	-	290	1,600	1,970
국 비	1,930	-	145	800	985
시 도 비	965	-	72.5	400	492.5
시군구비	965	-	72.5	400	492.5
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 48%)

○ 2015. 2. : 유물전시관 건립 기본설계 승인(문화재청)

○ 2015. 6. : 유물전시관 건립 실시설계 승인(문화재청)

○ 2015. 9. : 유물전시관 건립공사(건축 및 전시) 착공

□ 향후계획

○ 2016. 10. : 유물전시관 건립공사(전시) 준공

○ 2016. 12. : 유물전시관 개관

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

속초시수협 수산물산지거점유통센터

(FPC) 신축

담당자

해양수산과 박기호(☎639-2416)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수산물 산지유통시설 확충으로 수산물 수․공급기능 강화 및 생산어업인의

안정적 판로기반 확보

○ 수산물 부가가치 증대 및 유통단계 축소로 어업인 소득증대 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘13. 12. 11 ~ ‘15. 3. 31

○ 위 치 : 속초시 청호동 1341-1번지(속초시수협)

○ 규 모 : 3동/지상3층 철근콘크리트구조(연면적 : 7,354.25㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	11,200	9,280	1,920	-	-
국 비	6,400	6,400	-	-	-
시 도 비	1,440	1,440	-	-	-
시군구비	3,360	1,440	1,920	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업완료 : ‘15. 3. 31

□ 향후계획

○ 없음

□ 사업변경 내역

○ 없음

사업명

제3단계주거환경개선사업

(금호3지구)

담당자

건축디자인과 김희(☎2773)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후불량주택 밀집지역에 거주하는 저소득 주민 주거생활 안정

○ 도로 개설 등 각종 기반시설 정비를 통한 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2018년(4년간)

○ 위 치 : 속초시 금호동 사십계단 일원

○ 규 모 : 도로 2개 노선(504M), 소공원 1개소(246㎡), 주차장 1개소(399㎡),

보행자 전용도로 1개 노선(58M/ 국수골목), 빈집정비 6동(주민

공동텃밭)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,396백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	4,396			200	4,196
국 비	2,198			100	2,098
시 도 비
시군구비	2,198			100	2,098
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 정비구역지정 고시(2014.10.9.)

○ 2015년 사업 추진 : 지장물 조사 측량용역(61동), 편입토지 분햘측량(166필지),

빈집 정비(1동)

□ 향후계획

○ 2016년 사업 : 소로2-225호선 도로개설(B=8m, L=191m)

※ 감정평가, 손실보상, 지장물 철거, 실시설계용역

□ 사업변경 내역

※ 해당없음

사업명

신흥사 템플스테이 선체험관 건립사업

담당자

교육문화체육과 김만중(☎639-2958)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대한민국을 대표하는 설악산에 위치한 신흥사에 템플스테이 선체험관 건립을 통하여 우리 전통문화를 널리 소개하고 2018년 평창동계올림픽 개최에 따른 강원도 영동권 지역의 문화관광 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2016(3년간)

○ 위 치 : 강원도 속초시 설악산로 1137(설악동 170번지)

○ 규 모 : 건물2동, 한식 목구조 및 콘크리트구조

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,000	-	900	2,100	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	500	-	200	300	-
시군구비	500	-	200	300	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	2,000	-	500	1,500	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 49%)

○ 2015.  5. : 사업계획 승인(강원도)

○ 2015.  7. : 선체험관 건립 실시설계 준공

○ 2015. 10. : 선체험관 건립공사 착공

□ 향후계획

○ 2016. 10. : 선체험관 건립공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

9-2. 지방채 발행사업

우리 속초시에서 ‘15년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
해 당 없 음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2015년에 추진한 사업

9-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황 : 해당없음

9-3. 민간투자사업

우리 속초시에서 ‘15년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’14년까지 부담액	’15년 부담액	’16년 이후 부담 예정액
BTL	해 당 없 음
BTO	해 당 없 음

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2015년까지는 집행액(결산기준), 2016년 이후는 추정액

9-3-1. 개별 민간투자사업 현황 : 해당없음